Zweck und Anwendungsbereich	
•	Terminliche Planung aller Phasen und Realisationsschritte, von der Projektidee bis zum Projektabschluss sind abzudecken.
•	Die Terminplanung ist in enger Abstimmung mit der Erstellung der Arbeitspaketbeschreibungen und der Ressourcenplanung durchzuführen.
•	Die Terminplanung erfolgt unter Berücksichtigung der Meilensteine und Ecktermine.
•	Für die Erstellung des Terminplanes ist der Projektleiter verantwortlich. Bei den einzelnen Planungsschritten wird er von den Arbeitspaketverantwortlichen unterstützt.	

Erstellen der Terminplanung 	
•	Ermittlung von sachlogischen Abhängigkeiten der Vorgänge zu anderen Aufgaben und Vorgängen (Vorgänger/Nachfolgerbeziehungen).
Festlegung der bestmöglichen Reihenfolge der verschiedenen Aufgaben/Vorgänge.
•	Planung der für jeden Einzelvorgang eines AP benötigten Personalstunden, Anlagennutzungszeiten, Bestellzeiten für Material oder vorgefertigte Komponenten etc.
Abgleich mit den verfügbaren terminlichen Kapazitäten in den Durchführungseinrichtungen und dadurch Planung der Durchführungsdauer des gesamten AP.
•	Festlegung von Ereignissen, die das Eintreten eines bestimmten Zustandes der zu erbringenden Leistung des AP beschreiben. Sind diese von besonderer Bedeutung, werden sie als "Meilensteine" bezeichnet und in der Regel einer besonderen Kontrolle unterzogen. (siehe Meilensteintrendanalyse).
•	Erstellung des Terminplanes entsprechend eines Balken- und eines Meilensteinplans. Optimierung in verschiedenen Iterationsschritte, z.B. bzgl. Gesamtprojektdauer, Kapazitätsauslastung, parallele Vorgangsbearbeitung und über die Projektlaufzeit.	

Checkliste	
•	Ist für alle Arbeitspakete eine realistische Aufwandeinschätzung für die Bearbeitung durchgeführt worden?
•	Sind den Arbeitspakete die Verantwortlichen und Beteiligten zuzuordnen und damit die zeitliche Dauer zu ermitteln?
•	Sind Anfangs- und Endtermin für jedes Arbeitspaket bestimmt?
•	Werden Eck- oder Meilensteintermine überschritten?
•	Welche Vorgänge/Arbeitspakete lassen sich verschieben, um eine Optimierung des Ablaufplanes zu erreichen?
•	Welche Termine sind für das Berichtswesen vorgesehen?	

Empfohlenes Tool		MS Projekt